ПЛАН ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА УКРАИНЫ ПО РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЬСТВУ К ЧЛЕНСТВУ В ЕВРОПЕЙСКОМ БИЗНЕС РЕЕСТРЕ

№		Задача	Срок исполнения	Исполнитель	Описание	
1		Предоставить необходимую информации о членстве в Европейском Бизнес Реестре				
	1.1	Перевести на украинский (документ Word) Договор ЕБР об Обмене и Предоставлении Информации	Середина июня	Проект	Док: УГОДА ПРО СПІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (ISA)	
	1.2	Перевести на украинский Договора о Членстве в ЕВР	Середина июня	Проект		
	1.3	Предоставить информацию о стоимости членства в ЕБР	Середина июня	Проект		
	1.4	Информировать о необходимом для членства оборудовании и инфраструктуре	Июль	Проект	Док: ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНСТВУ В ЕВРОПЕЙСКОМ БИЗНЕС РЕЕСТРЕ	
	1.4.1	     Описание процесса установки оборудования и программного обеспечения ЕБР	25 июля	Проект	Web site	
	1.5	Информировать о необходимых шагах по подготовке к вступлению в ЕБР	Июль	Проект	Док: ПЛАН ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА К ЧЛЕНСТВУ ЕБР - V2	
	1.5.1	     Привести цены продажи информации в ЕБР и цены взаимозачета между членами	13 июля	Проект	Док: Цены продажи информации в ЕБР	
	1.5.2	     Предоставить информацию о сборе и публикации финансовой информации о компаниях в европейских странах	25 июля	Проект	Док: Disclosure of financial information in Europe_RU	
	1.5.3	     Примеры национальных финансовых условий Договора об Обмене и Предоставлении Информации	25 июля	Проект	Док: Zeni prodaji informazii v EBR	
	1.6	Предоставить документы по проекту BRITE	13 июля	Проект	Док: папка ДОКУМЕНТЫ ЕБР	
	1.7	Предоставить примеры презентаций европейских реестров	13 июля	Проект	Док: папка ПРЕЗЕНТАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ РЕЕСТРОВ	
	1.8	Выяснить, как подписывается договор о членстве в ЕБР: отдельно с каждым членом или один договор все вместе		Проект		
	1.9	Предоставить описание информационной архитектуры Европейского Бизнес Реестра		Проект	Док: Приложение 10	
	1.10	Представить описание формата обмена данных, разрабатываемого Европейским Бизнес Реестром для передачи информации между реестрами европейских стран участниц	Сентябрь	Проект 	Док: Приложение 13 	
	1.11	Оценка информационных возможностей украинской системы регистрации	Октябрь	Проект	Док: Приложение 5	
	1.12	Сравнительный анализ информационных возможностей украинской и европейских систем регистрации	Октябрь	Проект	Док: Приложение 6	
	1.13	Описание технических и организационных требований к членству в Европейском Бизнес Реестру		Проект	Док: Приложение 11	
2		Подготовить структуры Комитета к членству в ЕБР				
	2.1	Обсудить контрактные и технические условия членства в ЕБР	Конец июня	Проект / Комитет	Док: ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНСТВУ В ЕВРОПЕЙСКОМ БИЗНЕС РЕЕСТРЕ	
	2.1.1	     Определить, может ли Украина быть членом ЕГЭИ ЕБР или только членом ЕБР			Док: Оценка форм сотрудничества с Европейским Бизнес Реестром	
	2.1.2	     Определить, какая информация из реестра может поставляться в электронном виде	13 июля	Проект / Комитет	Док: ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНСТВУ В ЕВРОПЕЙСКОМ БИЗНЕС РЕЕСТРЕ	
	2.2	Подготовить структуры Комитета к членству в ЕБР	Конец июля	Комитет / Проект	Разрешить правовые вопросы Информационно-ресурсного Центра (Док: ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНСТВУ В ЕВРОПЕЙСКОМ БИЗНЕС РЕЕСТРЕ)	
	2.3	Определить каналы для распространению информации из сети ЕБР по Украине	Июль - Декабрь	Комитет / Проект	Определиться с организацией распространения информации	
	2.4	Предоставить примеры как распространяется информация ЕБР в других странах	25 июля	Проект	примеры: время для предоставления информации из реестров разных стран 	
3		Подготовить подпись контракта				
	3.1	Отправить официальный запрос о членстве в ЕБР ЕГЭИ (Европейская Группа Экономических Интересов)	Конец июля	Комитет		
-	3.2	Организовать приезд Директора ЕБР (г-н Вито Жианнелла) в Киев	25 июля – 5 Августа	Комитет / Проект		
	3.3	Представить кандидатуру Украины на ежегодном собрании членов ЕБР ЕГЭИ	30 ноября 2005, Дублин	Комитет		
	3.4	Подписать Договор о Членстве в ЕВР, и Договор об Обмене и Предоставлении Информации со всеми членами ЕБР	Ноябрь-Май	Комитет		
4		Подготовить техническую инфраструктуру Комитета к членству в ЕБР				
	4.1	Подготовить сетевую техническую инфраструктуру	Ноябрь 	Комитет		
	4.2	Организовать приезд технических консультантов ЕБР	Ноябрь	Комитет / Проект	8-10 дней поддержки и обучения в Киеве (включено в стоимость 1-го года членства в ЕБР)	
	4.3	Произвести установку оборудования	Ноябрь	Комитет / ЕБР		
	4.4	Произвести установку программного обеспечения	Ноябрь	ЕБР / Комитет		
	4.5	Произвести тесты оборудования и программного обеспечения	Декабрь	Комитет / ЕБР		
5		Подготовить персонал Комитета				
		Обучение системной администрации	Ноябрь 	ЕБР		
		Обучение администрации сервисных приложений	Ноябрь	ЕБР		
6		Информировать о членстве Комитета в ЕБР				
		Информировать украинское правительство о первоначальном соглашении с ЕБР о членстве Украины	Октябрь	Комитет		
		Информировать украинское правительство об окончательном соглашении с ЕБР о членстве Комитета	Конец октября	Комитет	После решения ежегодного пленума членов ЕБР которое состоится 20 октября 2005	
		Начать работу как полноправный член ЕБР	С января 2006	Комитет		
		Распространить известие об информационных ресурсах предоставляемых Комитетом посредством членства в ЕБР	Январь 2006	Комитет